배전공사 협력회사 업무처리기준 비교표

2014. 10. 8 개정

현  행

개 정(안)

개정사유

배전공사 협력회사 업무처리기준

1. 목 적

(생략)

2. 적용범위 및 대상공사

가. (생략)

1) ～ 2) (생략)

나. 대상공사 구분

1) 고압협력회사 수행공사(고압공사)

가) 계약된 사업소 관내에서(건설사업소 설계분 포함) 발생되는 배전설비 공사 중 저압공사를 제외한 모든 배전공사

나) (생략)

2) 지중협력회사 수행공사 (지중공사)

계약된 사업소 관내에서(건설사업소 설계분 포함) 발생되는 배전설비 공사 중 가공(배전사선, 활선, 무정전)공사가 수반되지 않는 지중배전공사

3) 저압협력회사 수행공사 (저압공사)

가) ～나) (생략)

다. (생략)

1) ～ 3) (생략)

3. 책임사항

구분	책 임	책임 사항
주관 부서	구매처장	․배전공사 협력회사 선정 및 운영 계획 승인
	구매실장	․배전공사 협력회사 선정 및 운영 계획 검토
	담 당	․배전공사 협력회사 선정 및 운영 계획 작성 ․배전공사 협력회사 계약 집행기준 관리
협조 부서	배전운영처	․배전공사 협력회사 인원, 장비 확보기준 검토 ․배전공사 협력회사 운영 및 공사관리
	(신설)
	HSSE실 안전재난관리팀	․배전공사 협력회사 산업안전보건관리비 관리 ․배전공사 협력회사 안전관련 기준 관리
	품질경영실	․배전공사 협력회사 품질, 환경경영계획서 관리 ․배전공사 공사업체 조달품목 하자관리지침 관리
사업소	불법하도급 주관부서	․협력회사 불법하도급여부 등 점검(반기1회이상)
	1차사업소 계약담당부서	․협력회사 입찰 수행(낙찰예정자 결정, 계약체결 등) ․하자보수 보증금, 위약벌 수납 ․부정당 시공 협력회사 제재(중도해지)
	1차사업소 협력회사 담당부서	․협력회사 지역분할 및 협력회사 수 결정 ․낙찰예정자 인원장비 실사 주관 ․부정당 시공 협력회사 제재(시공통보서 발행중지,위약벌) ․부실시공, 안전사고 등 유발 기능인력 벌점 부과 ․협력회사 종사자 교육 주관

4. 참고자료

가. ～ 다. (생략)

라. 배전공사 기능교육·자격 관리절차서

5. 협력회사 운영

가. 지역분할

1) 협력회사의 지역분할은 다음기준에 따라 시행한다.

가) 고압 및 지중협력회사

긴급공사 등 선착공 공사, 각종 측정 및 점검 공사(활선기별점검 제외), 추정가격(부가가치세 제외) 1,000만원 이하 신규․지장배전선로 이설공사에 한하여 공사의 원활한 수행을 위하여 사업소 내 지정된 협력회사를 대상으로 지역을 구분하여 지역전담 체제로 운영하며 긴급공사란 다음 각 호를 말한다.

(1) ～ (3) (생략)

나) (생략)

(생략)

(1) ∼ (4) (생략)

2) (생략)

나. 협력회사 수 운영

1) 고압협력회사 수 (ⓐ)

협력회사 수 (ⓐ) = [eqn: {총도급실적금액(ⓑ)} over {56억원}]

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('10~'11) 배전공사 중 긴급공사(8천만원 초과분)와 도급액 8천만원이하 공사의 도급액 실적 합산치(VAT 포함, 백만원 이하는 4사5입)로 산정한다.

다) (생략)

(1) ∼ (3) (생략)

(가) 최근 2년간('10~'11) 공사실적이 자연재해, 택지개발, 심야수용 등으로 과거 연평균 공사실적 보다 과다(소)하게 반영되어 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 감소될 것으로 예상되거나 또는 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 증가할 것으로 예상되는 경우

(나) (생략)

2) 지중협력회사 수 (ⓐ)

협력회사 수 (ⓐ) = [eqn: {총도급실적금액(ⓑ)} over {56억원}]

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('10~'11) 배전공사 중 지중긴급공사(8천만원 초과분)와 도급액 8천만원이하 사선지중 배전공사의 도급액 실적 합산치(VAT 포함, 백만원이하는 4사5입)

단, 지중 협력회사 수 산정은 상기 조건에 따라  사업소 단위로 지중협력회사를 운영함을 원칙으로 하되, 사선지중 공사실적 5억원 이상인 2차 사업소가 있는 경우 1차사업소에서 판단하여 권역별로 인근사업소와 통합 운영할 수 있음

다) (생략)

3) 저압협력회사 수 (ⓐ)

협력회사 수 (ⓐ) = [eqn: {총도급실적금액(ⓑ)} over {16억원}]

가) (생략)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('10~'11) 배전공사 중 저압긴급공사(8천만원 초과분)와 도급액 8천만원 이하 저압배전공사의 도급액 실적 합산치(VAT 포함, 백만원 이하는 4사5입)

다) (생략)

다. 입찰대상 공사건수 결정

(생략)

6. 추정도급액

가. ∼ 다. (생략)

7. 협력회사 선정

가. ∼다. (생략)

라. 입찰시행방법

1) (생략)

가) ∼라) (생략)

2) (생략)

가) ∼나) (생략)

3) 입찰방법

가) (생략)

(1) (생략)

(2) 계약부서는 각각의 가상설계서에 대한 공사원가 예정가격 산출기초 조서, 예비가격 기초금액을  작성한 후 입찰순번에 따라 차례대로 입찰공고, 입찰 (개찰은 가급적 수동개찰 하되, 건별 개찰간격은 충분한 시차를 두고 시행)을 집행한다.

(3) (생략)

나) ∼ 라) (생략)

마. 입찰시기

투찰(입찰)기간은 2012년 11월 9일부터 11월 15일까지 2개 권역(수도권사업소, 기타 사업소)으로 구분하여 전국적으로 동시에 시행함을 원칙으로 한다.

○ 수도권역 : 11월 9일 ～ 13일 / 기타권역 : 11월 13일 ～ 15일

바. (생략)

사. 낙찰예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 낙찰예정통지를 받은 후 20일 이내에 다음에서 정하는 기술인력과 장비 및 야적장을 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하여야 한다.

1) 상근전공 확보기준

각 사업소별 추정 도급예산액 규모에 따라 다음과 같이 상근 보유인원을 확보하여야 한다.

가) 고압협력회사

추정도급액	확보대상인원(ⓐ)
	무정전전공	배전전공	계
25억 이하	4 명	3 명	7 명
25억 초과 30억 이하	4 명	4 명	8 명
30억 초과 35억 이하	4 명	5 명	9 명
35억 초과 45억 이하	4 명	6 명	10 명
45억 초과	4 명	7 명	11 명

(1) 무정전전공 및 배전전공의 자격기준은 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 및 배전공사 기능교육․자격 관리절차서에 따른다.

(2) ∼ (3) (생략)

나) 지중협력회사

추정도급액	지중배전전공
25억 이하	5 명
25억 초과 35억 이하	6 명
35억 초과 45억 이하	8 명
45억 초과	9 명

(1) 지중배전전공의 자격기준은 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 및 배전공사 기능교육․자격 관리절차서에 따른다.

(2) (생략)

다) 저압협력회사

추정 도급액	확보인원
	배전전공	내선분야 전공	계
3.3억 미만	1 명	1 명	2 명
3.3억 이상 6억 이하	2 명	2 명	4 명
6억 이상 11억 미만	3 명	3 명	6 명
11억 이상	4 명	4 명	8 명

(1) 배전전공의 자격기준은 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 및 배전공사 기능교육․자격 관리절차서에 따른다.

(2) (생략)

라) (생략)

2) 장비 확보기준

가) 협력회사 낙찰예정자로 선정된 업체는 계약체결일까지 다음 각 호와 같이 장비 및 공구를 구비(권고장비 제외)하여야 한다.

(1) ∼ (3) (생략)

나) ∼ 다) (생략)

3) 자재야적장 및 시설기준

가) ∼ 다) (생략)

아. 인원 등 확인방법

낙찰예정자가 결정된 경우 계약담당부서는 낙찰예정자를 공사 발주부서로 통보하고 공사발주부서는 통보받은 업체의 인원 등의 보유여부를 ‘사’항의 기준에 따라 다음과 같이 확인한 후 그 결과(확보기준에 적합한지 여부 명시)를 계약담당부서로 통보한다.

1) ∼ 2) (생략)

가) ∼ 라) (생략)

3)  (생략)

가) ∼ 나) (생략)

자. 계약체결

1) ∼ 3) (생략)

가) 협력회사 수가 1개인 경우 또는 다수의 협력회사 중 모두가 계약체결이 지연된 경우에는 신규 협력회사와 계약체결 전까지 ‘11년도 기 계약된 협력회사와 연장 계약하여 시공하되 시공통보 방법은 ’8.다.1)‘항 및 ’8.다.2).가)‘항에 따라 처리한다.

나) (생략)

4) ∼ 5) (생략)

차. 계약 보증금

1) ∼ 2) (생략)

카. 계약기간

1) 고압, 지중 및 저압협력회사의 계약기간은 2년으로 하며 그 이행기간은 ’13년 1월 1일부터 ’14년 12월 31일까지로 한다. 다만, 낙찰자 결정 지연 등으로 계약체결일이 1월 1일 이후인 경우에는 계약체결일로부터 ’14년 12월 31일까지로 한다.

2) (생략)

8. 계약금액 산출 및 시공통보

가. 단위공사 계약금액 산출

1) (생략)

2) 2013, 2014년도 실적공사비 공종별 실적단가는 전기

공사비 지수를 반영하여 산정한다. 단, 원가계산방식에

의한 설계금액 적용시 공종별 공사비 단가는 시중노임에

물가변동률을 반영하여 산정한 금액으로 한다.

나. (생략)

다. 시공 통보

1) 협력회사 수(고압, 지중 또는 저압)가 각 1개인 사업소에서는 해당 협력회사에 일괄하여 시공통보 한다. 다만, 해당 협력회사가 일정기간 제재를 받아 시공통보 중지를 받은 경우 해당기간 동안의 공사는 전자공개 수의계약에 의해 시행함을 원칙으로 하되, 공사유형에 따라 다음과 같은 입찰참가 적격업체를 대상으로 시행한다.

가) 무정전공사 : 전기공사업 등록업체로서 무        정전공사 시공인증업체

나) 활선공사 : 전기공사업 등록업체로서 무정전공사 시공인증업체 또는 활선 적격업체

다) 사선공사 : 전기공사업 등록업체로서 가공배전전공 자격이상의 자격소지자 4명이상 보유 업체

라) 지중공사 : 전기공사업 등록업체로서 지중배전전공 자격소지자 2명이상 보유 업체

2) (생략)

가) (생략)

(1) ∼ (2) (생략)

나) 예외조치 사항

(1) ∼ (3) (생략)

○ 1일 평균 시공통보금액

= [eqn: {prime 11년도```협력회사별(고압,`지중,`저압)````시공통보금액````총계} over {prime 11년도```총``영업일수(247일) TIMES 협력회사수(고압,`지중,`저압)} `]

☞ 협력회사별 1일 평균 시공통보금액 : 고압(6백만원),

지중(4.2백만원), 저압(1.8백만원)

(예시) 고압 3일 제재시 보정금액

⇒ 6백만원 × 3일 = 18백만원

3) 여러 개의 도서지역을 관할하는 사업소에서 일부지역을 분할하여 지역전담제로 운영하는 경우 분할된 도서지역의 공사는 해당지역 고압협력회사에게  공사금액에 관계없이 시공통보하고 ‘2).가)’항의 시공통보 누계금액은 다음 각호에 따라 산정하며, 본 기준의 ‘13’항에 의거 일정기간 제재를 받아 시공통보 중지를 받을 경우 해당지역 협력회사의 제재기간 동안 도서지역의 공사는 ‘1)’항 단서와 같이 전자공개수의계약에 의해 시행토록 한다.

가) ∼ 나) (생략)

4) 설비고장이나 긴급안전조치 등 긴급한 공사의 경우 설비관리부서장(또는 비상근무내칙에서 정한 자)은 공사 및 표준품셈관리규정 제59조에 의거 선착공 통보를 할 수 있다. 이 경우 최단시간 내에 복구가 가능한 협력회사나 2개 이상의 협력회사에게 선착공 통보를 할 수 있으며, 설비관리부서장은 복구공사 완료 후 즉시 설계명세서를 작성하여 계약부서로 계약을 의뢰하여야 한다.

5) ∼ 8) (생략)

9. 시공관리

가. 책임시공

1) ∼ 2) (생략)

3) (신설)

4) (신설)

3) (생략)

4) 공사성격상 중요공정에 대해서는 시공부서장이 판단하여 필요시 공사감리자(감독자)로 하여금 현장입회를 하게 할 수 있다

5) ∼ 6)  (생략)

나. 작업종사자의 자격

1) ∼ 2) (생략)

다. 공사시공

1) ∼ 2) (생략)

라. 고객관리

1) ∼ 2) (생략)

10. 안전 및 품질관리

가. ∼ 라. (생략)

마. (생략)

(신설)

바. (신설)

바. 계약상대자는 안전사고 예방을 위하여 작업현장 안전관리에 철저를 기하고, 소속직원이 안전작업수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적으로 교육을 시행하여야 한다.

사. 계약상대자는 시공품질에 대한 책임을 다하며 계약자 품질경영계획서를 작성하여 품질담당부서에 제출하여야 한다.

아. ∼ 파. (생략)

11. 준공검사

가. (생략)

나. 준공신고서에는 준공물자 기별조서, 준공도면, 공사비 변경명세서와 필요시 매설물․은폐물 시공과정 및 시공완료 상태 등의 사진을 첨부하여야 한다.

다. ∼ 라. (생략)

12. 하자보수 보증금 수납

가. ∼ 다. (생략)

13. 사후관리

가. 공사품질 확보와 안전사고 예방 및 공정한 계약질서 확립을 위하여 계약기간 중 공기업·준정부기관 계약사무규칙에 규정된 사항 외에 다음에 따라 계약상대자를 제재한다.

1) 항목별 제재기준

제재내용 항 목	계약기간중 시공통보서 발행 중지					중도해지
	3일	5일	10일	20일	30일
1. 시공통보 이행불응		○				10회
2. 선착공 통보 동원불응		○				10회
3. 선착공 통보 동원지체 (유선통보후 현장도착까지 2시간 초과시)	○					10회
4. 무단작업	※ 1회 적발시 20일 시공중지					8회
5. 고압정전 유발 (작업중 또는 공사하자로 정전발생)	※ 일시정전 1회 (10일 시공중지) ※ 순간정전 1회 ( 5일 시공중지)					일시 5회
6. (생략)						-
7. 안전사고 발생	※ 사망 2명(계약해지), 사망 1명(45일 시공중지), 중상 1명(15일 시공중지) 경상 1명( 5일 시공중지)					부상 4명
8. 안전지적서 발행	1회	2회	3회	4회		5회 이상
9. 공사 시정통보서 발행 (누계 3회시)	○					10회
10. 불량 기자재 사용	○					10회
11. (생략)
12. (생략)
13. 시공방법 임의변경	○					10회
14. 폐전주, 근가, 애자류 방치	○					10회
15. 사전 승인없이 사급자재를 설계 내역과 달리 시공할 경우	○					10회
16. (생략)
17. (생략)
(신설)
(신설)
(신설)

주1) 계약기간 중 제재항목별 중도해지 조건은 계약

기간 누계치 기준임

주2) ∼ 주3) (생략)

주4) 안전사고 발생 시 제재기준은 안전담당부서의 사고조사에 대하여 계약심의 위원회가 심의한 결과 협력회사의 귀책사고로 판단하는 경우 적용하며, 제재기준은 아래와 같이 적용한다.

○ 사망 2명(계약해지), 사망 1명(45일 시공중지), 중상 1명(15일 시공중지),   경상 1명당(5일 시공중지)

※ 중상 : 14일 이상 입원 또는 요양,  경상 : 1일～13일 입원 또는 요양

주5) 안전사고를 고의로 은폐한 경우는 상기 제재점수의 1.5배 가중 적용한다.

주6) 시공통보서 발행 중지기간 산정 시 당사 휴무일은 일수산정에서 제외한다.

주7) ∼ 주11) (생략)

주12) (신설)

주13) (신설)

2) ∼ 3) (생략)

나. ∼ 다. (생략)

라. 협력회사 관리

불법 하도급공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 협력회사의 하도급 여부, 기능인력, 장비, 자재, 현장사무소 보유현황 등을 아래와 같이 확인한다.

1) 확인책임자 : 불법하도급 관리 주관 부서장

2) 평가반원 : 확인책임자가 지정한 자(2~3명)

3) 실사회수 : 반기 1회 (필요시 수시 시행)

4) ∼ 5) (생략)

14. 협력회사 종사자 교육

가. 이 기준에 의하여 계약 체결된 협력회사의 종사자는 연 1회 당사에서 실시하는 다음 교육에 참여 하도록 한다.

1) ∼ 4) (생략)

나. 협력회사는 ‘가.’항에 의한 교육 이외에 인재개발원 또는 우리회사에서 지정한 교육기관에서 시행하는 직원 업무능력 향상 교육에 참여토록 한다.

1) 교육대상 : 시공관리책임자 또는 전공장 (필요시               전공도 가능)

2) (생략)

3) 교육주관 : 당사 인재개발원 또는 지정교육기관

4) 교육내용 : 신기술․신공법, 안전사고 예방 및     공사 시공품질에 관한 사항

다. (생략)

1) ∼ 2) (생략)

3) 교육주관 : HSSE실 안전재난관리팀

4) (생략)

가) ∼ 나) (생략)

라. (생략)

1) ∼ 4) (생략)

가) ∼ 나) (생략)

15. ∼ 17. (생략)

결재	시공부서
	파트장	팀 장

[별표1]

고압협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	(생략)	(생략)	(생략)	1
2~4.8	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
4.9	(생략)	(생략)	개	각3
4.10∼ 4.11	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)

주1)∼주4) (생략)

2. 일반 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1~4	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
5	(전선휴즈 압착기)	6.0㎟∼10㎟	개	1
		대용량 전선휴즈압축기 (6.0㎟∼95㎟) (충전식 대용량 전선휴즈 압축기 인정가능)		1
6~8	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
9	(생략)	(생략)	개	1
10∼14	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
	(신설)

주1) 순번 4번 전선압축기의 압축력시험기와 순번 9번 텐셔너

는 동일사업장내 협력회사간 공용사용 가능

주2)∼주3) (생략)

주4) 1항 기본장비류의 순번 4번 전선이선기구를 보유하고 있는

협력회사는 순번 13번을 확보 불요

주5) (생략)

3. 안전 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1∼2	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
3	(생략)	(생략)	(생략)	(9∼14)
4	(안전허리띠)	(생략)	(생략)	(9∼14)
5	(생략)	(생략)	(생략)	(7∼11)
6	(생략)	(생략)	(생략)	(4∼6)
7	(활선접근 경보기)	(생략)	(생략)	(9∼14)
8	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
9	(애자카바 (덮개))	25.9kV, 9" HEIGHT	(생략)	(생략)
10	(완금카바 (덮개))	46kV ('13년 권고장비)	개	4
11∼13	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
14	(라인호스)	1“ 23kV급 (‘13년 권고장비)	개	4
15∼17	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
18	(생략)	(생략)	(생략)	(7∼11)
19∼25	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
26	활선용 완철		개	1
	(신설)

주1)∼주4) (생략)

(신설)

주5) (생략)

주6) 순번 26번은 활선용 완철공법 본격 활용 후 보유

4. 지중공사용 장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
				A	B
1~18	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
19	(신설)

주)(생략)

5. 기타 권고장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1~3	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
4	활선스틱 공구 (링크스틱헤드, 바인드스틱 헤드, 애자포크, 코터기제거기, 볼소켓 조절기, 핀홀더, 코터기 취부기, 조정핀, 함마, 코터기 풀러, COS용 플라이어, 롤러링크스틱, 와이어통, 새들엔드타이트너, 활선바이스 크립, 폴탑카바, 유니버셜폴, 그립프, 올크램프스틱, 이어홀딩스틱)		(생략)	(생략)
5~37	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
38	중성선 롤러	(생략)	(생략)	(생략)
39	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
	(신설)
	(신설)
	(신설)
	(신설)
	(신설)
	(신설)

[별표 2]

지중협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비 및 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1~18	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
19	(누전탐지기)	(생략)	(생략)	1
20~25	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)

주1)∼주2) (생략)

2. 안전장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
2	(생략)	(생략)	(생략)	(6∼11)
3	(안전허리띠)	(생략)	(생략)	(6∼11)
4	(생략)	(생략)	(생략)	(5∼9)
5~7	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
8	(생략)	(생략)	(생략)	(5∼9)
9	(생략)	(생략)	(생략)	(5∼9)
10∼21	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
22	(신설)

주1)∼주3) (생략)

주4)  (신설)

3. 기타 권고장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1~18	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
	(신설)
	(신설)
	(신설)
	(신설)
	(신설)

주1) (생략)

[별표 3]

저압협력회사 장비(공구) 확보기준

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
				A	B
1	(생략)	(생략)	(생략)	3	2
2~6	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
7	(안전 허리띠)	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
8~11	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
12	(대용량 전선휴즈 압축기)/(충전식 대용량 전선휴즈 압축기 인정가능)	2.6㎟~100㎟	(생략)	(생략)	(생략)
13	유압식 압축기	(생략)	(생략)	1	1
14	누전점 탐지기	(생략)	(생략)	1	0
		(생략)		1	1
15	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
16~18	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)

주1) (생략)

주2) 순번 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18번의 추정 도급액별 상근전공 인원수에 따라 확보

주3)∼주4) (생략)

주5) 신설

【별표11】

배전공사 공사업체조달품목 하자관리지침

1. ∼ 2. (생략)

3. 용어의 정의

가. ∼ 라. (생략)

마. “주관부서”라 함은 이 지침을 관리 및 운영하는 본사 품질경영실을 말한다.

바. ∼ 아. (생략)

4. ∼ 17. (생략)

배전공사 협력회사 업무처리기준

1. 목 적

(좌동)

2. 적용범위 및 대상공사

가. (좌동)

1) ～ 2) (좌동)

나. (좌동)

1) (좌동)

가) 계약된 사업소 관내에서 발생되는 배전설비 공사 중 저압공사를 제외한 모든 배전공사

나) (좌동)

2) (좌동)

계약된 사업소 관내에서 발생되는 배전설비 공사 중 가공(배전사선, 활선, 무정전)공사가 수반되지 않는 지중배전공사

3) (좌동)

가) ～나) (좌동)

다. (좌동)

1) ～ 3) (좌동)

3. 책임사항

구분	책 임	책임 사항
주관 부서	배전계획처장	(좌동)
	배전계획팀장	(좌동)
	담 당	․배전공사 협력회사 선정 및 운영 계획 작성 ․배전공사 협력회사 운영 및 공사관리
협조 부서	(좌동)	․무정전 배전공사 시공업체 관리 ․배전공사 기초인력 교육 및 자격관리
	자재처	․배전공사 협력회사 계약 집행기준 관리
	비상안전처	(좌동)
	품질경영처	(좌동)
사업소	협력회사 담당부서	․부정당 시공 협력회사 제재(시공통보서 발행중지,위약벌) ․부실시공, 안전사고 등 유발 기능인력 벌점 부과
	(좌동)	(좌동) ․계약해지, 안전사고 심의(계약심의위원회 운영)
	(좌동)	․협력회사 지역분할 및 협력회사 수 결정 ․낙찰예정자 인원장비 실사 주관 ․협력회사 종사자 교육 주관 ․협력회사 불법하도급 여부 등 점검 주관(분기1회이상)

4. 참고자료

가. ～ 다. (좌동)

라. 배전공사 기초인력교육·자격 관리절차서

5. 협력회사 운영

가. 지역분할

1) (좌동)

가) (생략)

(생략)

(1) ～ (3) (좌동)

나) (좌동)

(좌동)

(1) ∼ (4) (좌동)

2) (좌동)

나. 협력회사 수 운영

1) (좌동)

(좌동)

가) (좌동)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('12~'13) 배전공사 중 긴급공사(8천만원 초과분)와 도급액 8천만원이하 공사의 도급액 실적 합산치(VAT 포함, 백만원 이하는 4사5입)로 산정한다.

다) (좌동)

(1) ∼ (3) (좌동)

(가) 최근 2년간('12~'13) 공사실적이 자연재해, 택지개발, 심야수용 등으로 과거 연평균 공사실적 보다 과다(소)하게 반영되어 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 감소될 것으로 예상되거나 또는 향후 전망되는 추정도급액이 기준치보다 현저하게 증가할 것으로 예상되는 경우

(나) (좌동)

2) (좌동)

(좌동)

가) (좌동)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('12~'13) 배전공사 중 지중긴급공사(8천만원 초과분)와 도급액 8천만원이하 사선지중 배전공사의 도급액 실적 합산치(VAT 포함, 백만원이하는 4사5입)

단, 지중 협력회사 수 산정은 상기 조건에 따라  사업소 단위로 지중협력회사를 운영함을 원칙으로 하되, 사선지중 공사실적 5억원 이상인 2차 사업소가 있는 경우 1차사업소에서 판단하여 권역별로 인근사업소와 통합 운영할 수 있음

다) (좌동)

3) (좌동)

(좌동)

가) (좌동)

나) 총도급실적금액(ⓑ)은 사업소별 최근 2년간('12~'13) 배전공사 중 저압긴급공사(8천만원 초과분)와 도급액 8천만원 이하 저압배전공사의 도급액 실적 합산치(VAT 포함, 백만원 이하는 4사5입)

다)  (좌동)

다. (좌동)

(좌동)

6. 추정도급액

가. ∼ 다. (좌동)

7. 협력회사 선정

가. ∼ 다. (좌동)

라. (좌동)

1) (좌동)

가) ∼라) (좌동)

2) (좌동)

가) ∼나) (좌동)

3) (좌동)

가) (좌동)

(1) (좌동)

(2) 계약부서는 각각의 가상설계서에 대한 공사원가 예정가격 산출기초 조서, 예비가격 기초금액을  작성한 후 입찰순번에 따라 차례대로 입찰공고, 입찰 (개찰은 투찰마감일 18:00~20:00에 시행 하되, 건별 개찰간격은 충분한 시차를 두고 시행)을 집행한다.

(3) (좌동)

나) ∼ 라) (좌동)

마. 입찰시기

투찰(입찰)기간은 2014년 11월 4일부터 11월 14일까지 2개 권역(수도권사업소, 기타 사업소)으로 구분하여 전국적으로 동시에 시행함을 원칙으로 한다.

○ 수도권역 : 11월 4일 ～ 12일 / 기타권역 : 11월 4일 ～ 14일

바. (좌동)

사. 낙찰예정자 구비사항

낙찰예정자로 결정된 업체는 낙찰예정통지를 받은 후 20일 이내에 다음에서 정하는 기술인력과 장비 및 야적장을 확보하여야 하며 계약기간 동안 이를 상시 유지하여야 한다. 단, 계약기간 1차년도 공사실적이 추정도급액보다 미달되어 상근 보유인원의 조정을 요청하는 경우 해당 사업소장의 책임하에 추정도급액에 해당하는 인원으로  조정할 수 있다.

1) 상근전공 확보기준

(좌동)

가) 고압협력회사

추정도급액	확보대상인원(ⓐ)
	무정전전공	배전전공	계
25억 이하	4 명	3 명	7 명
25억 초과 30억 이하	4 명	4 명	8 명
30억 초과 35억 이하	4 명	5 명	9 명
35억 초과 40억 이하	4 명	6 명	10 명
40억 초과 45억 이하	4 명	7 명	11 명
45억 초과 50억 이하	4 명	8 명	12 명
50억 초과	4 명	9 명	13 명

(1) 무정전전공 및 배전전공의 자격기준은 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 및 배전공사 기초인력교육․자격 관리절차서에 따른다.

(2) ∼ (3) (좌동)

나) 지중협력회사

추정도급액	지중배전전공
25억 이하	5 명
25억 초과 30억 이하	6 명
30억 초과 35억 이하	7 명
35억 초과 40억 이하	8 명
40억 초과 45억 이하	9 명
45억 초과 50억 이하	10 명
50억 초과	11 명

(1) 지중배전전공의 자격기준은 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 및 배전공사 기초인력교육․자격 관리절차서에 따른다.

(2) (좌동)

다) 저압협력회사

추정 도급액	확보인원
	배전전공	내선분야 전공	계
3.3억 미만	1 명	1 명	2 명
3.3억 이상 6억 이하	2 명	2 명	4 명
6억 이상 11억 미만	3 명	3 명	6 명
11억 이상	4 명	4 명	8 명

(1) 배전전공의 자격기준은 무정전 배전공사 시공업체 관리절차서 및 배전공사 기초인력교육․자격 관리절차서에 따른다.

(2) (좌동)

라) (좌동)

2) 장비 확보기준

가) 협력회사 낙찰예정자로 선정된 업체는 다음 각 호와 같이 장비 및 공구를 구비(권고장비 제외)하여야 한다.

(1) ∼ (3) (좌동)

나) ∼ 다) (좌동)

3) (좌동)

가) ∼ 다) (좌동)

아. (좌동)

1) ∼ 2) (좌동)

가) ∼ 라) (좌동)

3) (좌동)

가) ∼ 나) (좌동)

자. (좌동)

1) ∼ 3) (좌동)

가) 협력회사 수가 1개인 경우 또는 다수의 협력회사 중 모두가 계약체결이 지연된 경우에는 신규 협력회사와 계약체결 전까지 ‘13년도 기 계약된 협력회사와 연장 계약하여 시공하되 시공통보 방법은 ’8.다.1)‘항 및 ’8.다.2).가)‘항에 따라 처리한다.

나) (좌동)

4) ∼ 5) (좌동)

차. 계약 보증금

1) ∼ 2) (좌동)

카. 계약기간

1) 고압, 지중 및 저압협력회사의 계약기간은 2년으로 하며 그 이행기간은 ’15년 1월 1일부터 ’16년 12월 31일까지로 한다. 다만, 낙찰자 결정 지연 등으로 계약체결일이 1월 1일 이후인 경우에는 계약체결일로부터 ’16년 12월 31일까지로 한다.

2) (좌동)

8. 계약금액 산출 및 시공통보

가. (좌동)

1) (좌동)

2) 2015, 2016년도 실적공사비 공종별 실적단가는 전기

공사비 지수를 반영하여 산정한다. 단, 원가계산방식에

의한 설계금액 적용시 공종별 공사비 단가는 시중노임에

물가변동률을 반영하여 산정한 금액으로 한다.

나. (생략)

다. 시공 통보

1) 협력회사 수(고압, 지중 또는 저압)가 각 1개인 사업소에서는 해당 협력회사에 일괄하여 시공통보 한다. 다만, 해당 협력회사가 일정기간 제재를 받아 시공통보 중지를 받은 경우 해당기간 동안의 공사는 연접사업소의 동일공종 협력회사 중 시공통보 누계금액이 가장 낮은 회사로 시공통보 한다. 이 경우 연접사업소란 공사현장을 관할하는 지사와 관할구역이 경계를 접하고 있는 지역본부내 지사를 말한다

2) (좌동)

가) (좌동)

(1) ∼ (2) (좌동)

나) (좌동)

(1) ∼ (3) (좌동)

○ 1일 평균 시공통보금액

= [eqn: {prime 13년도```협력회사별(고압,`지중,`저압)````시공통보금액````총계} over {prime 13년도```총``영업일수(246일) TIMES 협력회사수(고압,`지중,`저압)} `]

☞ 협력회사별 1일 평균 시공통보금액 : 고압(8.4백만원), 지중(6.1백만원), 저압(2.5백만원)

(예시) 고압 3일 제재시 보정금액

⇒ 8.4백만원 × 3일 = 25.2백만원

3) 여러 개의 도서지역을 관할하는 사업소에서 일부지역을 분할하여 지역전담제로 운영하는 경우 분할된 도서지역의 공사는 해당지역 고압협력회사에게  공사금액에 관계없이 시공통보하고 ‘2).가)’항의 시공통보 누계금액은 다음 각호에 따라 산정하며, 본 기준의 ‘13’항에 의거 일정기간 제재를 받아 시공통보 중지를 받을 경우 해당지역 협력회사의 제재기간 동안 도서지역의 공사는 전자공개수의계약에 의해 시행함을 원칙으로 하되, 공사유형에 따라 다음과 같은 입찰참가 적격업체를 대상으로 시행한다.

≪입찰참가 적격업체≫

○ 무정전공사 : 전기공사업 등록업체로서 무        정전공사 시공인증업체

○ 활선공사 : 전기공사업 등록업체로서 무정전

공사 시공인증업체 또는 활선 적격업체

○ 사선공사 : 전기공사업 등록업체로서 가공

배전전공 자격이상의 자격소지자 4명이상 보유 업체

○ 지중공사 : 전기공사업 등록업체로서 지중

배전전공 자격소지자 2명이상 보유 업체

가) ∼ 나) (좌동)

4) 설비고장이나 긴급안전조치 등 긴급한 공사의 경우 설비관리부서장(또는 비상근무내칙에서 정한 자)은 공사 및 표준품셈관리규정 제59조에 의거 선착공 통보를 할 수 있다. 이 경우 사업소 단위 지역별로 구분된 협력회사에 우선하여 선착공 통보해야하고, 지역별 협력회사가 긴급동원이 불가능한 경우 관내 협력회사 중 시공통보 누계금액이 낮은 협력회사순으로 선착공 통보 하여야 하며 설비관리부서장은 복구공사 완료 후 즉시 설계명세서를 작성하여 계약부서로 계약을 의뢰하여야 한다. 단 야간 또는 휴일의 경우에는 사업소 별도 기준에 따라 선착공 통보할수 있다.

5) ∼ 8) (좌동)

9. 시공관리

가. 책임시공

1) ∼ 2) (좌동)

3) 계약상대자는 당사의 표준시공 및 공법을 준수하여 시공하여야 하며, 표준시공 및 공법을 미준수 할 경우 13. 사후관리 기준에 따라 제재 한다.

4) 모든 공사는 해당 공종의 위험성 체크리스트를 활용하여 시공전 공정별 핵심 Check Point를 확인하여야 하며, 주요 공정의 필수 안전조치 사항에 대해서는 공사현장 실시간 모니터링 시스템을 활용, 시공부서의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

5) (좌동)

6) 공사성격상(안전사고 우려 또는 무정전 공법 등) 중요공정에 대해서는 시공부서장이 판단하여 필요시 공사감리자(감독자)로 하여금 현장입회를 하게 할 수 있다

7) ∼ 8) (좌동)

나. (좌동)

1) ∼ 2)  (좌동)

다. (좌동)

1) ∼ 2) (좌동)

라. (좌동)

1) ∼ 2) (좌동)

10. 안전 및 품질관리

가. ∼ 라. (좌동)

마. (생략)

단, 건설업안전관리비 계상기준 고용노동부 고시

개정으로 안전관리비 사용 Guide Book이 개정되는 경우에는 개정된 안전관리비 사용 Guide Book에 따라 적용한다

바. 계약상대자는 산업재해 발생 또는 발주자의 요구시 계약상대자의 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 근로복지공단에서 발행하는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 및 「사업개시 사업장 현황」등을 발주자 안전관리부서에 제출하여야 하며, 안전관리부서는 산업재해 처리실적을 확인한 후 안전사고에 해당할 경우 사후관리에 의거 제재조치 한다.

사. 계약상대자는 안전사고 예방을 위하여 작업현장 안전관리에 철저를 기하고, 소속직원이 안전작업수칙을 준수하도록 수시 또는 정기적으로 교육을 시행하여야 한다. 또한 계약기간 중 매 반기 마다 1회이상 재해예방 기술지도기관의 기술지도 또는 컨설팅을 받고 관련 비용은 안전관리비로 정산하여야 한다.

아. 계약상대자는 품질계획서를 작성하여 품질담당부서에 제출하고, 시공품질에 대한 책임을 다하여야 한다.

자. ∼ 하. (좌동)

11. 준공검사

가. (좌동)

나. 준공신고서에는 준공물자 기별조서, 준공도면, 공사비 변경명세서와 준공검사 과정에서 확인이 곤란한 공정(전선접속개소, 접지저항 측정, 매설물·은폐물 시공과정 및 시공완료 상태 등)의 사진을 첨부하여야 한다.

다. ∼ 라. (좌동)

12. (좌동)

가. ∼ 다. (좌동)

13. 사후관리

가. (좌동)

1) (좌동)

제재내용 항 목	계약기간중 시공통보서 발행 중지					중도해지
	3일	5일	10일	20일	30일
1. 시공통보 이행불응		1회	2회	3회	4회	5회
2. 선착공 통보 동원불응		1회	2회	3회	4회	5회
3. 선착공 통보 동원지체 (유선통보후 현장도착까지 2시간 초과시)	1회	2회	3회	4회		5회
4. 무단작업		1회	2회	3회	4회	5회
5. 고압정전 유발 (작업중 또는 공사하자로 정전발생)		일시1회	일시 2회	일시 3회	일시 4회	5회
	순간1회	순간2회	순간 3회	순간 4회
6. (좌동)
7. 안전사고 발생	※ 사망 1명 : 180일 중상 1명 : 30일 경상 1명 : 10일					사망2명 부상4명
8. 안전지도서 발행	1회	2회	3회	4회		5회
9.공사 시정통보서 발행 (누계 3회시)	○					5회
10. 불량 기자재 사용		1회	2회	3회	4회	5회
11. (좌동)
12. (좌동)
13. 시공방법 임의변경	1회	2회	3회	4회		5회
14. 폐전주, 근가, 애자류 방치	1회	2회	3회	4회		5회
15. 사전 승인없이 사급자재를 설계 내역과 달리 시공할 경우	1회	2회	3회	4회		5회
16. (좌동)
17. (좌동)
18. 불법하도급으로 부정당제재를 받은경우						1회
19. 금품·향응 제공	“주12 참조”
20. 안전관리 소홀	○					-

주1) 제재항목별 중도해지 조건은 계약기간 누계치 기준이며, 상기 5항 고압정전 유발의 경우 일시 및 순간정전을 합산한다.

주2) ∼ 주3) (좌동)

주4) 안전사고 발생 시 제재기준은 안전담당부서의 사고

조사에 대하여 계약심의 위원회에서 심의한 결과

협력회사의 귀책사고로 판단하는 경우 적용하며,

제재기준은 아래와 같이 적용한다.

단, 협력회사의 귀책이 명백하고 협력회사가 이를

인정하는 경우 계약심의위원회 심의를 생략할 수 있다.

○ 사망 2명(계약해지), 사망 1명(180일 시공중지), 중상 1명(30일 시공중지),   경상 1명당(10일 시공중지)

※ (좌동)

주5) 안전사고를 고의로 은폐한 경우는 상기 제재기준의 1.5배 가중 적용한다.

주6) 시공통보서 발행 중지기간 및 시공통보 중지로 인한 보정금액 산정 시 당사 휴무일은 일수산정에서 제외한다.

주7) ∼ 주11) (좌동)

주12) 상기 19번 항목은 당사와 관련하여 금품·향응 제공 행위에 대하여 내부 및 대외기관으로부터 적발시 금품·향응 수수자(한전직원)에 대한 감사실 징계 결과에 따라 적용하며, 제재기준은 아래와 같이 적용 한다.

○ 금품·향응 수수자(한전직원)에 대한 감사실 징계 결과

- 해 임 : 계약해지

- 정 직 : 180일 시공통보 중지

- 감 봉 : 90일 공통보 중지

- 견 책 : 30일 시공통보 중지

주13) 상기 20번 항목은 활선·무정전 표준공법 미준수, 공사현장 모니터링 미신고, 안전관리비 미집행 또는 목적외 사용, 본 기준의 14항 협력회사 종사자 교육 미참여 시 적용한다.

2) ∼ 3) (좌동)

나. ∼ 다. (좌동)

라. (좌동)

(좌동)

1) 확인책임자 : 1차사업소 협력회사담당 부서장

2) 평가반원 : 확인책임자가 지정한 자

3) 실사회수 : 분기 1회 (필요시 수시 시행)

4) ∼ 5) (좌동)

14. 협력회사 종사자 교육

가. 이 기준에 의하여 계약 체결된 협력회사의 종사자는 연 1회 당사에서 실시하는 다음 교육에 참여 하여야 한다.

1) ∼ 4) (좌동)

나. 협력회사는 ‘가.’항에 의한 교육 이외에 인재개발원 주관으로 시행하는 직원 업무능력 향상 교육에 참여 하여야 한다.

1) 교육대상

○ 고압 및 지중 : 시공관리책임자 또는 전공장

(필요시 전공도 가능)

○ 저 압 : 저압협력회사 종사자 전체

2) (좌동)

3) 교육주관 : 당사 인재개발원

4) 교육내용

○ 신기술․신공법 및 공사 시공품질에 관한 사항

○ 신개발 전력량계 설정 및 설치, 오결선 사례 등

○ 안전사고 예방 및 고객응대 등

다. (좌동)

1) ∼ 2) (좌동)

3) 교육주관 : 비상안전처 산업안전팀

4) (좌동)

가) ∼ 나) (좌동)

라. (좌동)

1) ∼ 4) (좌동)

가) ∼ 나) (좌동)

15. ∼ 17. (좌동)

[별표1]

고압협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	(좌동)	(좌동)	(좌동)	1 이상
2~4.8	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
4.9	(좌동)	(좌동)	(좌동)	6 (다굴절 3개이상)
4.10∼ 4.11	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

주1)∼주4) (좌동)

2. 일반 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1~4	(생략)	(생략)	(생략)	(생략)
5	(충전식 대용량 전선휴즈압축기)	(삭제)	(좌동)	0(삭제)
		(2.6/3.2㎜, 22㎟∼100㎟)		(좌동)
6~8	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
9	(텐셔너) (접지롤러 포함)	(좌동)	개	0 (삭제)
9∼13	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
14	중성선 롤러	암타이밴드 결합형	개	6

주1) 순번 4번 전선압축기의 압축력시험기는 동일사업장내

협력회사간 공용사용 가능

주2)∼주3) (생략)

주4) 1항 기본장비류의 순번 4번 전선이선기구를 보유하고 있는

협력회사는 순번 12번을 확보 불요

주5) (좌동)

3. 안전 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1∼2	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
3	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(9∼16)
4	(안전대)	(좌동)	(좌동)	(9∼16)
5	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(7∼13)
6	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(4∼7)
7	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(9∼16)
8	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
9	(좌동)	25.9kV, 9" HEIGHT 또는 Bindless Cover	(좌동)	(좌동)
10	(좌동)	46kV	(좌동)	(좌동)
11∼13	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
14	(좌동)	1“ 23kV급	(좌동)	(좌동)
15∼17	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
18	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(7∼13)
19∼25	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
	활선용 완철		(좌동)	0 (삭제)
26	Rubber Glove 활선작업용 공구 (로프포박 브랭킷, 핸드라인 훅, 와이어통새들, 새들 익스텐션, 와이어통, 와이어통 밴드, 와이어통 폴 크래비스, 1륜·2륜 절연활차, 화이어 홀딩스틱, 그립올 크램프 스틱)		개	각1

주1)∼주4) (좌동)

주5) 순번7번은 경보기 내장형 절연안전모 보유수량만큼 수량 인정

주6) (좌동)

(삭제)

4. 지중공사용 장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
				A	B
1~18	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
19	(절연스틱)	(23kV급 DS봉) (변압기,개폐기,COS조작용)	개	1	1

주)(좌동)

5. 기타 권고장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1~3	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
4	Hot Stick 활선작업용 공구 (레버리프트, 고정칼날형 스틱, 회전갈퀴형 스틱, 유니버셜폴, 활선바이스클립, 레버형 전선절단기, 레처트 전선절단기, 주상작업잘판대, 이중보조암, 와이어통 새들 크레비스, 활선 압축기(HY-35), 롤러링크스틱, 나선형 링크스틱, 핫스틱 텐션폴러, 애자포크, 쉐퍼트 훅, 코터키 제거기, 코터리 풀러, 코터키설치기, 핀홀더, 볼소켓 조절기, 조정핀, 유압회전톱, 망치, 링크스틱헤드, 충전부 임시 절연캡, 와이어그립, 활선공구 랭크, 싱글블록, 더블블록, 와이어홀더, 와이어통 T형 클램프, 화이어통 암 스트랍, 핫스틱 습도 시험기)		(좌동)	(좌동)
5~37	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
	중성선 롤러	(생략)	(생략)	(삭제)
38	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
39	텐셔너 (접지롤러 포함)	· 전선(25~160㎟) · 1상 또는 3상	개	1
40	활선용 완철		개	1
41	(맨홀뚜껑 개방기)	맨홀 및 핸드홀 뚜껑 개방	대	1
42	(특고압 케이블 사활측정기)	펄스식 (맨홀내 상식별 및 사활구분)	대	1
43	(누설전류계)	AC 300V, AC+DC 0～10mA	대	1
44	(엘보접속 검사용절연자)	지상변압기 엘보 유격 확인용	개	1

주1) 순번40번은 현재 제작회사가 없어 권고장비로 변경한

것으로 추후 실사여부 공문 발송

[별표 2]

지중협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비 및 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1~18	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
19	(좌동)	(좌동)	(좌동)	0(삭제)
19~24	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

주1)∼주2) (좌동)

2. 안전장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
2	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(6∼14)
3	(안전대)	(좌동)	(좌동)	(6∼14)
4	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(5∼11)
5~7	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
8	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(5∼11)
9	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(5∼11)
10∼21	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
22	(절연스틱)	(23kV급 DS봉) (변압기,개폐기,COS조작용)	개	1

주1)∼주3) (좌동)

주4) 순번8번은 경보기 내장형 절연안전모 보유수량만큼        수량 인정

3. 기타 권고장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
1~18	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
19	누전탐지기	사선/활선 가능	대	1
20	(맨홀뚜껑 개방기)	맨홀 및 핸드홀 뚜껑 개방	대	1
21	(특고압케이블 사활측정기)	펄스식 (맨홀내 상식별 및 사활구분)	대	1
22	(누설전류계)	AC 300V, AC+DC 0～10mA	대	1
23	(엘보접속 검사용절연자)	지상변압기 엘보유격 확인용	개	1

주1) (좌동)

[별표 3]

저압협력회사 장비(공구) 확보기준

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수 량
				A	B
1	(좌동)	(좌동)	(좌동)	1	1
2~6	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
7	(안전대)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
8~11	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
12	(충전식 대용량전선휴즈압축기)	2.6/3.2㎜, 22㎟∼100㎟	(좌동)	(좌동)	(좌동)
13	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(삭제)	(삭제)
14	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(삭제)	(삭제)
		(좌동)		(삭제)	(삭제)
13	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)
14~16	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

주1) (좌동)

주2) 순번 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16번의 추정 도급액별 상근전공 인원수에 따라 확보

주3)∼주4) (좌동)

주5) 순번13번 경보기 내장형 절연안전모 보유수량만큼 수량 인정

【별표11】

배전공사 공사업체조달품목 하자관리지침

1. ∼ 2. (좌동)

3. 용어의 정의

가. ∼ 라. (좌동)

마. “주관부서”라 함은 이 지침을 관리 및 운영하는 본사 품질경영처을 말한다.

바. ∼ 아. (좌동)

4. ∼ 17. (좌동)

○ 문구정비

○ 문구정비

○ 업무조정에 따른 처실별 책임사항 변경

○ 책임사항 명확화

○ 책임사항 명확화

○ 책임사항 명확화

○ 용어 변경사항 반영

※ 배운(운)84106-798(‘14.5.26)

○ 대상연도 변경사항 반영

○ 대상연도 변경사항 반영

○ 대상연도 변경사항 반영

○ 대상연도 변경사항 반영

○ 개찰시간 지정으로

혼선 예방

※ 입찰집행 유의사항과 통일

○ 투찰일자 변경

○ 전기공사협회 요구

사항 반영

○ 추정도급액 범위 및

구간별 배전전공 조정

※ 운영경비 분석 결과 5억원 기준 배전전공 1인 증가

○ 용어 변경사항 반영

※ 배운(운)84106-798(‘14.5.26)

○ 추정도급액 범위 및

구간별 배전전공 조정

※ 운영경비 분석 결과 5억원 기준 배전전공 1인 증가

○ 용어 변경사항 반영

※ 배운(운)84106-798(‘14.5.26)

○ 용어 변경사항 반영

※ 배운(운)84106-798(‘14.5.26)

○ 문구정비

※ 사.낙찰예정자 구비사항 “20일 이내 확보”문구와 혼선

○ 연도 변경사항 반영

○ 연도 변경사항 반영

○ 연도 변경사항 반영

○ 협력회사수가 1개인

사업소의 제재 실효성

확보

○ 1일 평균 시공통보금액 재산정 결과 반영

○ 1)항 단서 삭제에 대한

세부사항 명시

○ 긴급공사에 대한 업무 투명성 확보

○ 배전운영처 요구사항 반영

※ 배운(운)84106-1489(‘14.10.1)

○ 비상안전처 요구사항 반영

※ 비상(산)28106-1471(‘14.9.22)

○ 배전운영처 요구사항 반영

※ 배운(운)84106-1489(‘14.10.1)

○ 고시개정 여지 반영

○ 산업재해 처리실적 제출 의무화로 안전사고 은폐 방지

○ 비상안전처 요구사항

반영

※ 비상(산)28106-1471(‘14.9.22)

○ 안전관리비 사용 가이드북 7.8항 재해예방 기관의 기술지도 반영

○ 비상안전처 요구사항 반영

※ 비상(산)28202-1223(‘14.8.5)

○ 문구수정

○ 내용 명확화

○ 횟수별 제재기준 차등 적용으로 은폐예방 등 제재 실효성 확보

○ 안전사고 발생 및

시공품질 저해행위에 대한 제재기준 강화

○ 불법하도급 및 비위행위 업체에 대한 제재기준 명시

○ 내용 명확화

○ 문구정비

○ 행정낭비 예방

○ 문구 정비

○ 문구 정비

○ ‘15년 협력회사 운영

계획 반영

※ 배계(계)84201-469(‘14.6.3)

○ 제재기준 명확화로 부조리 등 비위행위 근절

○ 시공품질 향상 및  안전사고 예방

○ 점검부서 명확화

○ ‘15년 협력회사 운영

계획 반영

※ 배계(계)84201-469(‘14.6.3)

○ 문구 명확화

○ 인재개발원 이외의 교육

기관이 주관하기에는

부적합

○ 저압협력회사 종사자에

대한 전문교육 시행으로

직무능력 향상

○ 조직명칭 변경

○ 다굴절 절연용이 안전

사고예방 및 시공품질

향상에 유리하므로 다굴절     절연용을 3개 이상으로

변경

○ 보유기준을 두가지 공     구에서 전선 전 규격     을 시공가능한 한가지     공구로 단일화 하고

전선규격표기 명확화

○ 협력회사 작업범위는

3∼4경간으로 짧아 텐

셔너가 거의 사용되지

않음. 현장에서는 활선

바켓트럭 및 블록

(연선로라)을 사용함.

○ 전선손상 방지로 시공     품질 향상(‘13년 예고)

○ 상근전공 확보기준 변경

○ 명칭 변경(안전작업

수칙과 명칭 통일) 및

상근전공 확보기준 변경

○ 활선접근경보기

- 경보기 내장형 안전모

보유시 중복

○ Bindless 애자의 방호

가능제품 개발에 따라

기존 제품과 병행사용

(비상안전처 반영요청)

○ 안전사고 예방을 위해

권고장비를 안전장구로

변경(완금카바, 라인호스)

(비상안전처 반영요청)

○ 상근전공 확보기준 변경

○ 제조회사가 없어 권고     장비로 변경

○ 배전운영처 요구사항

반영(공법준수 기반마련)

※배운(운)84106-1489(‘14.10.1)

○ 현장에서 충전전류

방전시 사용되는

절연스틱 추가

○ Hot Stick 활선작업용

공구 세분화

○ ‘15년부터 필수장비

예고 품목

○ 현장 사용빈도 적어 일반     장구에서 권고장비로 변경

○ 제조사가 없어 기본

장비에서 권고장비로 변경

○ 현장 작업 용이하도록

맨홀뚜껑 개방기 추가

○ 특고압 케이블 사활 판단

착오에 의한 오절단 예방

○ 저압접속함 내 누설전

류 및 유기전압 측정

○ 엘보시공 후 유격상태

확인 및 점검

○ 현장 사용빈도가 거의

없음

○ 상근전공 확보기준 변경

○ 명칭 변경(안전작업

수칙과 명칭 통일) 및

상근전공 확보기준 변경

○ 상근전공 확보기준 변경

○ 현장에서 충전전류

방전시 사용되는

절연스틱 추가

○ 현장 사용빈도가 적어

기본장비에서 권고장비로     전환

○ 현장 작업 용이하도록

맨홀뚜껑 개방기 추가

○ 특고압 케이블 사활 판

단착오에 의한 오절단

예방

○ 저압접속함 내 누설전

류 및 유기전압 측정

○ 엘보시공 후 유격상태

확인 및 점검

○ 1번 접지저항 측정기

- 사용빈도가 낮음

○ 7번 안전허리띠

- 명칭 변경(안전작업

수칙과 명칭 통일)

○ 12번 전선휴즈 압착기

- 전선 전 규격의 시공이

가능한 공구로 단일화     및 규격표기 명확화

○ 13번 유압식 압축기

- 12번 충전식 대용량 전선휴즈 압축기 보유시 불필요

○ 14번 누전점 탐지기

- 고가장비로 현장사용

빈도 거의 없음

○ 15번 활선접근 경보기

- 경보기내장형 안전모 보유 시 중복

○ 조직명칭 변경