2021년도 사업발주계획

2021. 1.

국방전산정보원

목       차

국방통합재정정보체계 고도화 사업 PMO	1

국방군수통합정보체계 서버 상용SW 증설 사업	2

2021년 전산운용 소모품 구매 사업	3

국방획득정보체계 분리발주SW 구매 사업	4

국방시설통합정보체계 플래시 플레이어 기술 대체 SW 도입사업(차트SW)	5

급식 빅데이터 분석모델 구축 사업	6

국방부 영내 출입통제체계 개선사업	7

국방인증체계 고도화 및 국방기기인증체계 구축 사업 PMO	8

국방전자도서관 고도화 사업 분리발주 상용SW 구매 사업	9

국방정보자원관리체계 성능개선 사업 감리	10

국방획득정보체계 개발 사업 감리	11

국방수송정보체계 고도화 사업 감리	12

국방통합재정정보체계 고도화 사업	13

국방 증명서 통합발급체계 구축 PMO 사업	14

국방수송정보체계 고도화 개인정보영향평가 용역 사업	15

국방수송정보체계 BMTS관련 장비 도입 사업	16

국방인증체계 고도화 및 국방기기인증체계 구축 사업	17

2020년 행정정보통합지원체계 성능개선 사업	18

2021년 노후 네트워크 장비 교체	19

민원콜/팩스유통체계 노후 장비 교체	20

2021년 사무용 전산장비 도입 사업	21

국방재난관리정보시스템 구축 사업 PMO	22

국방재난관리정보시스템 구축 사업	23

국방증명서 통합발급체계 구축 사업 감리	24

국방 증명서 통합발급체계 구축 사업	25

국방인사정보체계 고도화 분리발주 상용SW 구매 사업	26

국방통합재정정보체계 고도화 사업 감리	27

정보화교육장 클라우드 컴퓨팅 시범 구축 사업	28

국방 증명서 통합발급체계 구축 분리발주 상용SW 구매 사업	29

국방수송정보체계 고도화 사업 분리발주 상용SW 구매 사업	30

2022년 사이버지식정보방 유지보수 사업	31

2022년 국방연동관리시스템 유지보수 사업	32

2022년 국방자원관리체계 통합 유지보수 사업	33

2022년 정보화교육 위탁사업	34

국방통합재정정보체계 고도화 PMO 사업

(담당자 : 대위 오현석, 02)6424-5381)

1. 사업개요

「국방통합재정정보체계 고도화 사업」관리/감독 역량 강화를 위한 PMO 사업임.

2. 사업예산(‘21년) : 2.3억원(부가세 포함)

* 총사업비 : 9.2억원

3. 사업기간 : 2021년 2월 ~ 2023년 5월 / 약 28개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월	- 사업승인, 제안요청서 작성 및 조달청 계약의뢰
2021년 2월	- 계약
2021년 2월 ~ 2023년 5월	- 사업착수 / 사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업 기획단계

- 구축사업 ISP 산출물 검토 및 최신화

- 구축사업 체계개발 관련 사업계획서 등 사업발주에 대한 통합관리 지원

- 사업대가 검증 및 적정 대가 산정, 기술협상 지원

◦ 사업 집행단계

- 구축사업 추진 감독 및 실적 점검

- 구축사업 수행 중 발생한 일정 및 범위 변경사항 관리

- 과업 변경 영향분석 및 대안 제시

- 분석 및 설계, 종료단계 기능점수 적정성 검토 및 조정

- 사업의 검사 및 인수

- 단계별 감리 시정조치 확인 및 보고서 작성

- 단계별 하자보수 계획 및 절차 검토 및 조정

- 적용된 사업관리 절차 및 방법론, 위험 및 쟁점사항에 대한 관리 및 지식화

◦ 사업 완료단계

- 구축체계 안정화, 구축사업 산출물의 활용 및 관리 지원

- 하자여부 검토 및 하자보수 이행관리 지원

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방군수통합정보체계 서버 상용SW 증설 사업

(담당자 : 소령 채병철, 02)961-1937)

1. 사업개요

국방군수통합정보체계 전력화 이후 시스템 안정화를 위한 서버 상용SW 증설 사업임.

2. 사업예산 : 4.3억원(부가세, 조달수수료 포함)

3. 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 6월 30일 / 약 6개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~ 6월	- 상용SW 구매 및 설치

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 1월 ~ ‘21. 6월

◦ 사업범위 : 국방군수통합정보체계 서버 상용SW 증설분

5. 계약방법 : 제3자단가 구매(조달쇼핑몰)

‘20년 전산운용 소모품 구매 사업

(담당자 : 대위 고주희, 02)6424-5133 ~ 5)

1. 사업개요

원활한 전산운용 및 업무 지원을 위한 전산운용 소모품 구매 사업

2. 사업예산 : 0.8억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 3월 ~ 2021년 11월 / 약 10개월

일 정	주 요 내 용
2020년 2․5․8․10월	- 소요조사, 견적의뢰, 계약의뢰, 입찰공고
2020년 3․6․9․11월	- 계약
2020년 4․7․10․12월	- 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 전산운용 및 업무 지원을 위한 각종 소모품 구매

◦ 장관 및 기타 행사 지원을 위한 소모품 구매

◦ 훈련 지원을 위한 각종 소모품 구매

5. 계약방법 : 일반경쟁(최저가 입찰)

국방획득정보체계 분리발주 상용SW 구매 사업

(담당자 : 중령 노준현, 02)6424-5373)

1. 사업개요

국방획득정보체계 체계구축 사업에 필요한 상용SW 분리발주 사업임

2. 사업예산 : 16.9억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 8월 / 8개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~ 2월 / 6월 ~ 7월	- 체계규격 심의, 제안요청서 작성
2021년 2월 2주 / 7월 1주	- 계약의뢰, 입찰공고, 계약체결
2021년 3월 1주 / 8월 4주	- 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 1월 ~ 8월

◦ 사업범위 : DB모델링 툴 등 15종

5. 계약방법 : 제3자단가 구매(조달쇼핑몰), 제한경쟁

국방시설통합정보체계 플래시 플레이어(Flash Player) 기술 대체 SW 도입사업(차트SW)

(담당자 : 대위(진) 양도연, 02)6424-5322)

1. 사업개요

국방시설통합정보체계에 어도비 플래시 플레이어(Adobe Flash Player) 기술이 적용된 차트를 대체 개발하기 위해 웹 표준(HTML5) 기술이 적용된 차트 SW 도입 사업

2. 사업예산 : 0.14억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 2월 ~ 2021년 8월 / 약 7개월

일 정	주 요 내 용
2021년 2월 ~ 3월	- 사업추진방안(계약방법) 검토 * 제3자 단가구매 또는 수의계약
2021년 3월 ~ 4월	- 계약체결
2021년 4월 ~ 8월	- 사업 수행 및 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 2월 ~ 8월

◦ 사업범위 : 시설정보체계 PMIS 서버 외부망, 내부망 서버에 차트 생성 소프트웨어 각각 1식씩 설치

구분	주요내용
소프트웨어 도입	○ 차트 SW 도입 및 서버 설치
	○ 유지보수 사업 업무 지원(교육 및 커스터마이징 등)

5. 계약방법 : 제3자 단가구매 또는 수의계약

급식 빅데이터 분석모델 구축 사업

(담당자 : 주무관 한혜민, 02)6424-5311)

1. 사업개요

3D 스캐너를 활용하여 군 급식 데이터를 수집하고 품목별 기준량 및 적정수요를 판단하여 급식예산을 보다 효율적으로 운영하고 장병 급식 만족도를 향상시키는 급식 빅데이터 분석모델을 구축하는 사업

2. 사업예산(‘21년) : 2.9억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 4.9억원(’21년 : 2.9억, ’22년 : 2.0억)

3. 사업기간 : 2021년 4월 ~ 2022년 12월 / 약 20개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~ 3월	- 사업계획서 및 제안요청서 작성, 조달청 공고
2021년 4월	- 계약
2021년 5월 ~ 2022년 11월	- 사업 수행 (3D 스캐너 설치, 분석모델 구축 및 시각화)
2022년 12월	- 시험평가 및 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 4월 ~ ’22. 12월

◦ 사업범위

분 야	주 요 내 용
데이터 수집 및 저장	- 3D 스캐닝 기법, 설문조사, 인터뷰 등을 활용하여 데이터 수집 * 기존 설치된(9사단) 3D 스캐너 외 3개 취사장 추가 설치
급식 분석모델 구축	- 수집된 데이터를 분석, 최적의 급식 빅데이터 분석모델 구축
시각화 화면 제공	-「국방 빅데이터 분석포털 시스템」에 급식 분석모델 탑재, 분석 결과값의 시각화 화면 제공

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약방식)

국방부 영내 출입통제체계 개선사업

(담당자 : 대위 윤정모, 02)6424-5213)

1. 사업개요

국방부 영내 출입통제체계(12개 기관, 2개체계)에 대한 성능개선(체계 통합 포함) 및 노후장비 교체 사업임.

2. 사업예산 : 49.8억원(60개월 리스료/부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 4월 ~ 2021년 12월 / 약 8개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월	- 계약의뢰
2021년 4월	- 계약체결 및 사업착수
2021년 4월 ~ 12월	- 사업수행 * 분석(1개월), 설계(2개월), 구현(4개월), 단위/통합테스트 및 시험평가 (1개월)
2021년 12월	- 검수 및 전력화

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 국방부 영내 체계 통합구축 및 노후장비 교체

◦ 신규 번호판 차량인식 시스템 도입 등 성능 개선

◦ Active-X 제거 및 PC 단말기 Win10전환 등 보안성 강화 등

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약방식)

* 리스 사업으로 발주 예정

국방인증체계 고도화 PMO 사업

(담당자 : 이명호, 02)6424-5146)

1. 사업개요

「국방인증체계고도화 사업」 관리/감독 역량 강화를 위한 PMO 사업임.

2. 사업예산(‘21년) : 1.0억원(부가세 포함)

* 총사업비 : 2.13억원(`21년 : 0.97억원, `22년 : 1.16억원)

3. 사업기간 : 2021년 3월 ~ 2022년 12월 / 약 22개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~ 3월	사업계획서/제안요청서 작성, 조달청공고, 계약
2021년 3월 ~ 2022년 12월	사업수행(국방표준API 배포 관련, 기기인증체계 시범운영 관련 일정관리 등)
2022년 12월	사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 기획단계

- 대상사업 관련 사업계획서, 제안요청서, 사업발주에 대한 통합관리 지원

- 사업자 선정 시 기술협상 지원 등

◦ 집행단계

- 일정, 범위관리를 통해 위헙요인 식별 · 대응을 위한 사업관리

- 분석, 설계, 구현, 테스트, 적용 관련 기술검토 지원

- 주요 기능 검증 및 단계별 산출물 품질검토

- 다수의 이해관계자 간 의사소통 관리 지원

◦ 집행단계

- 운영을 위한 전환절차 검토 · 수립 및 하자보수 지원

- 교육, 홍보 등 고도화된 체계이용 활성화 지원

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약 방식)

국방전자도서관 고도화 및 군사자료 디지털 아카이브 구축사업 SW 분리발주

(담당자 : 주무관 김혁, 02)6424-5235)

1. 사업개요

국방전자도서관체계 고도화 및 군사자료 디지털 아카이브체계 구축 사업간 요구되는 상용SW 구매 사업임.

2. 사업예산(’21년) : 8.4억원(부가세 포함)

* 총사업비 : 12.8억원

* 국방전자도서관 : 11.4억(’21년 : 7.0억, ’22년 : 4.4억)

* 군사자료 아카이브 : 1.4억(’21년 : 1.4억)

3. 사업기간 : 2021년 1월 ~ 4월 / 약 4개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~ 2월	구매대상 상용SW 심의
2021년 2월 ~ 3월	발주(나라장터 종합쇼핑몰)
2021년 3월 ~ 4월	납품 및 설치

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 국방전자도서관체계 고도화사업 : 웹콘텐츠관리시스템, UI/UX도구, 대용량파일전송엔진, 리포팅툴 등 14종 구매

◦ 군사자료 디지털 아카이브체계 구축 사업: 웹콘텐츠관리시스템, 대용량파일전송엔진, 원문관리시스템 등 5종 구매

◦ 분석결과에 따라 구매항목이 변경될 수 있음

5. 계약방법 : 제3자단가 구매(조달쇼핑몰)

국방정보자원관리체계 성능개선 사업 감리

(담당자 : 사무관 권재환, 02)6424-5160)

1. 사업개요

「전자정부법」에 의거 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 수행하는, ‘국방정보자원관리체계(DRIMS) 성능개선 사업’ 감리용역

2. 사업예산 : 0.8억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 12월 / 약 7개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월	- 제안요청서 작성
2021년 4월 ~ 5월	- 공고 및 계약
2021년 6월 ~	- 감리 용역 수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 6월 ~ ’21. 12월

◦ 감리형태 : 2단계 정기감리(설계, 종료)

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방획득정보체계 개발 사업 감리

(담당자 : 주무관 이준호, 02)6424-5163)

1. 사업개요

「전자정부법」에 의거 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 수행하는, ‘국방획득정보체계 개발 사업’ 감리용역

2. 사업예산(‘21년) : 2.3억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 3.8억원

3. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 2023년 3월 / 약 22개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월	- 제안요청서 작성
2021년 4월 ~ 5월	- 공고 및 계약
2021년 6월 ~	- 감리 용역 수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 6월 ~ ’23. 3월

◦ 감리형태 : 정기감리(요구정의, 설계, 종료)

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방수송정보체계 고도화 사업 감리

(담당자 : 사무관 권재환, 02)6424-5163)

1. 사업개요

「전자정부법」에 의거 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 수행하는, ‘국방수송정보체계 고도화 사업’ 감리용역

2. 사업예산(‘21년) : 2.2억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 4.3억원

3. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 2023년 1월 / 약 20개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월	- 제안요청서 작성
2021년 4월 ~ 5월	- 공고 및 계약
2021년 6월 ~	- 감리 용역 수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 6월 ~ ‘23. 1월

◦ 감리형태 : 정기감리(요구정의, 설계, 종료)

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방통합재정정보체계 고도화 사업

(담당자 : 대위 오현석, 02)6424-5381)

1. 사업개요

국방예산의 전 과정(중기, 편성, 수입, 지출, 결산 등) 에 관한 통합된 정보를 관리, 분석하는 시스템을 최신 정보화 환경을 반영하고, 사용자 요구를 수렴하여

고도화하는 사업임.

2. 사업예산(‘21년) :  66.7억원(부가세 포함)

* 총사업비 : 406.3억원

3. 사업기간 : 2021년 8월 ~ 2023년 3월 / 약 20개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~4월	- 사업승인, 제안요청서 작성 및 조달청 계약의뢰
2021년 6월~7월	- 계약
2021년 8월 ~ 2023년 3월	- 사업착수 / 사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

1) 국방통합재정정보체계 업무 기능 강화 및 사용 범위 확대

2) 정책 결정에 필요한 재정정보분석 및 재정업무지원 특화서비스 도입

3) 4차 산업혁명 기술도입을 통한 재정 혁신기반 구축

4) 법제도 및 정책변화에 따른 기술 환경 변화 대응

5) 전시/훈련 재정정보체계 구축

6) 전자정부프레임워크 도입, 「Non ActiveX·Non Plugin」 SW 도입

을 통한 Multi Browser·OS 환경 실현 및 내‧외부체계 연동

강화 등 인프라 기반 선진화

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방 증명서 통합발급체계 PMO 사업

(담당자 : 주무관 고정은, 02)6424-5233)

1. 사업개요

국방 증명서 통합발급체계 구축을 위한 PMO 도입 사업

2. 사업예산(‘21년) : 0.4억원(부가세 포함)

* 총사업비 : 1.1억원

3. 사업기간 : 2021년 7월 ~ 2022년 9월 / 약 15개월

일 정	주 요 내 용
2021년 6월	- 조달청 공고
2021년 7월	- 사업자 선정 및 계약
2021년 7월 ~ 2022년 9월	- PMO 사업 수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 7월 ~ 9월

◦ 사업범위

- 본 사업인 『국방 증명서 통합발급체계 구축사업』에 대한 집행/사후관리단계의 사업관리 지원

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

수송정보체계 고도화 개인정보영향평가 용역사업

(담당자 : 대위 윤덕상, 02)6424-5295)

1. 사업개요

수송정보체계 고도화 사업에 대한 개인정보 영향평가를 실시하여

개인정보 침해 및 위협요인을 분석하고 개선사항을 도출하여 사고발생을 사전에 예방하기 위한 사업임.

2. 사업예산 : 1.5억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 7월 ~ 2022년 8월 / 약 2개월

일 정	주 요 내 용
2021년 5월	- 제안요청서 작성 및 조달청 계약의뢰
2021년 5ㆍ6월	- 사전규격공개 업체의견 답변 및 반영의견 수정, 제안요청서 재검토 발송(→조달청)
2021년 7월	- 계약 및 사업착수
2021년 8월	- 사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 개인정보 흐름 및 침해요인 분석 등 위험평가 실시

◦ 침해요인을 도출하여 개선할 수 있도록 평가 항목 선정

◦ 관련 볍규 지침 등을 반영한 개선방안 수립 및 컨설팅

5. 계약방법 : 제한경쟁(협상에 의한 계약)

* 행정안전부장관이 지정한 개인정보영향평가기관에 한함

수송정보체계 BMTS관련 장비 도입 사업

(담당자 : 중사 유주영, 02)6424-5297)

1. 사업개요

기존 BMTS 단말기 교체 및 관련 장비 도입사업

2. 사업예산(‘21년) : 0.2억원(부가세 포함)

* 총사업비 : 28.2억원(21년 : 0.2억원, 22년 : 3.1억원,  23년 : 24.9억원)

3. 사업기간 : 2021년 8월 ~ 2023년 4월 / 약 21개월(장기계속 계약)

일 정	주 요 내 용
2021년 2월	- 시장조사 및 사업계획 수립
2021년 3ㆍ4ㆍ5월	- 체계규격심의 계획/결과 보고, 제안요청서 작성, 사전규격공개 공고
2021년 6월	- 사전규격공개 업체의견 답변 및 반영의견 수정, 제안요청서 재검토 발송(→조달청)
2021년 8월	- 계약 및 사업착수
2023년 4월	- 사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ BMTS 관련 장비 구매

- '21년(단말기 4대, GPS 7대, 위성모뎀 2대, 포터블 모니터 1대)

- '22년(단말기 80대, GPS 41대, 위성모뎀 52대, 포터블 모니터 21대)

- '23년(단말기 703대, GPS 632대, 위성모뎀 193대, 포터블 모니터 55대)

5. 계약방법 : 제한경쟁(협상에 의한 계약)

국방인증체계 고도화 사업

(담당자 : 이명호, 02)6424-5146)

1. 사업개요

전 軍 운용 중인 국방인증체계(MPKI)의 정보보호 수준을 보강하고, 다양한 국방 ICT 환경변화에 대응 가능토록 고도화하는 사업임.

2. 사업예산(’21년) : 2,741백만원(부가세 포함)

* 체계개발 총사업비 : 3,926백만원(21년 : 2,741백만원, `22년 : 1,185백만원)

* 전체 사업비 90억 중 약 50억은 국방통합데이터센터에서 발주

3. 사업기간 : 2021년 5월 ~ 2022년 12월 / 약 20개월

일 정	주 요 내 용
2021년 1월 ~ 5월	사업계획서/제안요청서 작성, 조달청공고, 계약
2021년 5월 ~ 2022년 12월	사업수행(인증체계 고도화 및 간편인증 서비스 구축/배포, 국방기기인증체계 구축/배포 등)
2022년 12월	사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 최신 인증기술 및 표준 적용으로 대외적인 신뢰도 및 안정성 확보

◦ 보안 강도 강화를 위한 인증서 암호 알고리즘의 암호비도 및 키길이 상향

◦ 고도화된 인증체계 활용 및 확대 적용

◦ 암호키 위탁/저장 및 복구 등에 대한 키관리체계 정비

◦ 인증서비스 개선

- 생체인증, 모바일 OTP 등 다양한 인증수단을 통한 간편인증 서비스 제공

- 국방인증서 업무 프로세스(발급/승인 등) 개선

- 인사정보 및 조직정보 관련 정보체계와 연동을 통한 사용자의 데이터 생성 및 자동화 관리 서비스 제공 등

◦ HTML5 기반의 국방인증표준API 개발 및 배포를 통한 각 체계에 적용을 통한 인증서 업무의 표준화

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

'21년 행정정보통합지원체계 성능개선 사업

(담당자 : 주무관 표효찬, 02)6424-5222)

1. 사업개요

국방부 및 국직기관 대상 소규모 신규 업무 또는 기존 행정체계 성능개선을 위한 사업

2. 사업예산 : 7억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 2021년 11월 / 약 6개월

일 정	주 요 내 용
2021년 2월	- 사업 범위 종합 및 사업계획서 작성
2021년 3월	- 제안요청서 작성 및 보고 - 정보보호대책서 검토 및 일상감사 의뢰
2021년 4월	- 계약 의뢰
2021년 6월	- 계약체결 및 사업 착수
2021년 11월	- 시험평가 및 검수 실시 - 사업 종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 6월 ~ 11월

◦ 사업범위 : 홈페이지 4건 및 응용체계 2건 성능개선 및 구축

5. 계약방법 : 제한경쟁(협상에 의한 계약)

2021년 노후 네트워크 장비 교체

(담당자 : 상사 김선웅, 02)6424-5154)

1. 사업개요

국방부 및 소속기관에서 운용 중인 네트워크 장비의 내용연수 만료에 따른 노후 장비 교체 사업

2. 사업예산 : 26.2억 원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 7월 ~ 2021년 11월 / 약 5개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월 ~ 4월	- 사업계획 수립, 체계규격 확정
2021년 5월 ~ 6월	- 체계규격심의, 제안요청서 작성
2021년 6월	- 입찰공고 및 계약의뢰
2021년 7월 ~ 10월	- 계약, 사업 착수 및 구축
2021년 11월	- 평가, 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

노후화된 백본, 라우터 등 네트워크, 서버 장비 교체 및 이에 따른 관련 소프트웨어 도입

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

민원콜/팩스유통체계 노후 장비 교체

(담당자 : 주무관 문성철, 02)6424-5151)

1. 사업개요

국방부 및 소속기관에서 운용 중인 민원콜서비스체계 및 팩스유통체계 장비의 내용연수 만료에 따른 노후 장비 교체 사업

2. 사업예산 : 4억 원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 7월 ~ 2021년 9월 / 약 3개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월 ~ 4월	- 사업계획 수립, 체계규격 확정
2021년 5월 ~ 6월	- 체계규격심의, 제안요청서 작성
2021년 6월	- 입찰공고 및 계약의뢰
2021년 7월 ~ 8월	- 계약, 사업 착수 및 구축
2021년 9월	- 평가, 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

민원콜/팩스유통체계의 노후화된 하드웨어(서버, 스위치, PC, 전화기 등) 교체 및 관련 상용소프트웨어 도입 *기존 정보체계 이전설치비 포함

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

’21년 사무용 전산장비 도입 사업

(담당자 : 대위 고주희, 02)6424-5133 ~ 5)

1. 사업개요

내용연수가 만료된 노후 사무용 전산장비를 교체하고, 인가대비 부족 장비를 확보/지원하여 국방사무환경 개선을 위한 사업임

2. 사업예산 : 8.3억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 2월 ~ 2021년 11월 / 약 10개월

일 정	주 요 내 용
2021년 2월 ~ 3월	- 시장조사 및 사업계획 수립
2021년 4월 ~ 6월	- 체계규격심의 추진, 제안요청서 작성
2021년 7월 ~ 9월	- 계약 및 사업수행 (장비 납품 및 설치계획수립)
2021년 10월 ~ 11월	- 사업수행(분배 및 설치), 최종검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 2월 ~ 11월

◦ 사업범위 : 데스크탑 873대, 노트북 20대, 프린터 125대, 스캐너 31대, 하드파쇄기 1대, 빔 2대

5. 계약방법 : 2단계 경쟁 등의 총액입찰, 다수공급자(MAS)2단계 계약, 제3자단가 구매(조달쇼핑몰)

* 데스크탑은 리스 사업으로 발주 예정

국방통합재난관리정보시스템 구축 PMO 사업

(담당자 : 주무관 박효경, 02)748-5764)

1. 사업개요

「국방통합재난관리정보시스템 개발사업」관리/감독 역량 강화를 위한   PMO 사업임.

2. 사업예산(‘21년) : 2.4억원(부가세 포함)

* 총 사업비(감리비 포함) : 7억원

3. 사업기간 : 2021년 8월 ~ 2023년 7월 / 24개월

일 정	주 요 내 용
‘21. 2월∼사업 종료 시	- 국방통합재난관리정보시스템 개발 TF 편성
‘21. 4월 ∼ 7월	- 사업 계획서 및 제안요청서 작성, 공고
‘21. 8월	- 계약
‘21년 8월 ∼ ’23년 7월	- 사업착수 / 사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 기획단계

- 사업 계획서, 제안요청서, 사업발주에 대한 통합관리 지원

◦ 집행단계

- 일정, 범위관리를 통한 위험요인 식별‧대응을 위한 사업관리 지원

- 분석, 설계, 구현, 테스트, 적용 관련 기술검토 지원

- 주요기능 검증 및 단계별 산출물 품질 검토

- 다수의 이해관계자 간 의사소통 관리 지원

- 사업 위험사항 식별 및 분석 / 대응, 보안관리 계획 이행 점검

◦ 사후관리단계

- 운영을 위한 전환절차 검토 및 하자보수 이행 관리

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방통합재난관리정보시스템 개발사업

(담당자 : 주무관 박효경, 02)748-5764)

1. 사업개요

국방부·각 軍 간 재난 관련 시스템을 통합하여 신속한 정보공유를 통해 효과적인 재난관리용 시스템 구축

2. 사업예산(’21년) : 18.3억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 99.6억원

3. 사업기간 : 2021년 10월 ~ 2023년 5월 / 약 20개월

일 정	주 요 내 용
‘21. 2월∼사업 종료 시	- 국방통합재난관리정보시스템 개발 TF 편성
‘21년 6월 ∼ 8월	- 제안요청서 작성, 공고
‘21년 9월	- 계약
‘21년 10월 ∼ ’23년 5월	- 사업착수 / 사업종결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업 목표

∙ (통합 운용) 대내·외 재난관련 시스템과 연동 및 각 군·국방부별 분리된 4개를 통합·분석하여 기존에 축적된 데이터 표준화 작업 진행

∙ (GIS 활용) 가시화된 재난상황관리를 위해 GIS를 활용하여 군사·행정지도 동시 사용을 통해 재난관리 상황도 구성

∙ (모바일 개발) 재난안전통신망을 활용하여 재난현장 상황을 실시간 공유하여 의사결정권자의 즉각적인 지시에 따른 상황 조치

- 4G-LTE 기반 재난안전통신망 활용, 국방 모바일환경 구축사업과 연계

∙ (체계연동) 행안부·기상청, 군수통합정보체계 등 대내·외 정보체계와 연동하여 위기경보, 기상 등 필요한 정보를 신속·정확하게 수신

- 대내·외 체계와 보안대책이 강구된 상태에서 상호운용성 확보 필요

∙ PMO 운영으로 체계적인 사업관리 여건 마련(별도 계약)

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방증명서 통합발급체계 구축 사업 감리

(담당자 : 사무관 권재환, 02)6424-5163)

1. 사업개요

「전자정부법」에 의거 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 수행하는, ‘국방증명서 통합발급체계 구축 사업’ 감리용역

2. 사업예산(‘21년) : 0.3억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 1.0억원

3. 사업기간 : 2021년 11월 ~ 2022년 8월 / 약 10개월

일 정	주 요 내 용
2021년 6월	- 제안요청서 작성
2021년 9월 ~ 10월	- 공고 및 계약
2021년 11월 ~	- 감리 용역 수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 11월 ~ ’22. 8월

◦ 감리형태 : 정기감리(요구정의, 설계, 종료)

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방 증명서 통합발급체계 구축 사업

(담당자 : 주무관 고정은, 02)6424-5233)

1. 사업개요

각 군 및 기관에서 개별로 운영 중인 증명서 발급체계를 인터넷 상의 단일 창구를 통해 서비스하는 증명서 통합발급체계 구축 사업

2. 사업예산(‘21년 예산) : 3.4억원(부가세 포함)

◦ 총사업비 : 13.8억원

◦ 체계 구축비(10개 기관 정보체계 연계 포함) : 8.6억원

◦ H/W 도입비 : 5.2억원

* 상기 사업예산은 분리발주 상용SW 구매, 감리, PMO 사업비 미포함 금액임

3. 사업기간 : 2021년 9월 ~ 2022년 8월 / 약 12개월

일 정	주 요 내 용
2021년 8월	- 조달청 공고
2021년 9월	- 사업자 선정 및 계약
2021년 9월 ~ 2022년 8월	- 구축 사업수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 9월 ~ ‘22. 8월

◦ 사업범위

- 인터넷 상에서 회원관리 및 증명서 발급이 가능한 통합발급 기능 구현

- 증명서 발급 연계 대상 기관(육군사관학교 등 10개기관)과의 연계를 통한 증명서 통합발급체계 구축

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

국방인사정보체계 고도화사업 상용SW구매

(담당자 : 소령 박용민, 02)6424-5270)

1. 사업개요

국방인사정보체계고도화 사업 간 도입되는 상용SW 구매 계획임.

2. 사업예산 :  8.4억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 9월 ~ 2021년 11월 / 약 3개월

일 정	주 요 내 용
2021년 6월 2주	조달청 나라장터 등록 SW 규격검토
2021년 7월 1주 ~ 3주	규격 만족 제품이 없을 경우 과업내용서 작성 후, 조달청 공고 준비 (일상감사 등)
2021년 7월 4주 ~ 8월 4주	조달청 공고 및 계약
2021년 9월 1주 ~ 10월 4주	설치 납품 및 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 9월 ~ 11월

◦ 사업범위 : 국방인사정보체계 고도화사업 상용SW 구매(3종)

- DB모니터링 및 튜닝 솔루션, 전자북제작도구, 데이터접근제어

5. 계약방법 : 조달쇼핑몰 구매, 공개경쟁입찰계약

국방통합재정정보체계 고도화 사업 감리

(담당자 : 사무관 권재환, 02)6424-5163)

1. 사업개요

「전자정부법」에 의거 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 수행하는, ‘국방통합재정정보체계 고도화’ 감리용역

2. 사업예산(‘21년) : 1.4억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 5.7억원

3. 사업기간 : 2021년 11월 ~ 2023년 3월 / 약 17개월

일 정	주 요 내 용
2021년 8월	- 제안요청서 작성
2021년 9월 ~ 10월	- 공고 및 계약
2021년 11월 ~	- 감리 용역 수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 11월 ~ ’23. 3월

◦ 감리형태 : 정기감리(요구정의, 설계(2회), 종료)

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

정보화교육장 클라우드 컴퓨팅 시범구축사업

(담당자 : 주무관 박자인, 02)6424-5131)

1. 사업개요

국방전산정보원 정보화교육장에서 운용 중인 인트라넷 PC전량을 클라우드 컴퓨팅의 도입으로 보안성 향상 및 TCO(총 소유비용) 절감을 통한 효과적인 정보화교육 수행

2. 사업예산 : 1.3억(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 3월 ~ 2021년 12월 / 약 10개월

일 정	주 요 내 용
2021년 3월 ~ 4월	- 시장조사 및 사업계획 수립
2021년 4월 ~ 9월	- 제안요청서 작성
2021년 10월	- 계약 및 사업수행
2021년 11월 ~ 12월	- 사업수행(분배 및 설치), 최종검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : 2021년 3월 ~ 2021년 12월

◦ 사업범위 : 정보화교육장 인트라넷 PC

5. 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

국방 증명서 통합발급체계 분리발주 SW 구매 사업

(담당자 : 주무관 고정은, 02)6424-5233)

1. 사업개요

국방 증명서  통합발급체계 구축을 위한 분리발주 대상 상용 소프트웨어 구매 사업

2. 사업예산(‘21년) : 0.9억원(부가세 포함)

* 총 사업비 : 2.2억원

3. 사업기간 : 2021년 8월 ~ 2021년 10월 / 약 3개월

일 정	주 요 내 용
2021년 8월	- 분리발주 상용SW 심의
2021년 9월	- 발주(나라장터 종합쇼핑몰)
2021년 10월	- 납품 및 설치

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’21. 8월 ~ 10월

◦ 사업범위

- 리포팅툴 1식, 출력물 위변조방지 솔루션(2D바코드, 보이스바코드) 1식, 대량메일발송 솔루션 1식, 통합메시지 솔루션 1식 등

5. 계약방법 : 제3자단가 구매(조달쇼핑몰)

수송정보체계 고도화 사업 분리발주 상용SW 구매 사업

(담당자 : 대위 윤덕상, 02)6424-5295)

1. 사업개요

수송정보체계 고도화 사업 관련 개발 및 운영을 위한 상용SW

분리발주 구매 사업

2. 사업예산 : 37.8억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2021년 10월 ~ 2021년 12월 / 약 3개월

일 정	주 요 내 용
2021년 8월	- 소요조사(Core 및 제품명 등), 나라장터 제품 확인, 분리발주 대상 소프트웨어 적정성 검토
2021년 9월	- 체계규격심의 계획/결과 보고
2021년 10~12월	- 대상SW 구매 및 검수

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 개발 및 운영용 SW 구매(UI Tool 등)

5. 계약방법 : 제3자단가 구매(조달쇼핑몰)

’22년 국방 사이버지식정보방 유지보수 사업

(담당자 : 주무관 김승표, 02)6424-5132)

1. 사업개요

전 군에 설치된 사이버지식정보방 전산장비 유지보수 및 사이버지식정보방 이전, 신규설치 등 지원 사업

2. 사업예산 : 33.5억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2022년 01월 ~ 2022년 12월 / 1년

일 정	주 요 내 용
2021년 9월 ~ 10월	- 제안요청서 작성
2021년 11월 ~ 12월	- 입찰공고 및 계약
2021년 12월	- 업무 인수인계
2022년 1월 ~ 2022년 12월	- 사업착수 / 실적보고 및 대금집행(분기)

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’22. 1월 ~ 12월

◦ 사업범위 : PC, 모니터, 책상, 의자 각 40,000여대, 프린터 5,000여대, 네트워크장비 3000여대, 중앙서버 유지보수 등

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약방식)

‘22 국방연동관리시스템 유지보수 사업

(담당자 : 주무관 차우영, 02)6424-5341)

1. 사업개요

‘19.9월 부터 구축되어 운용중인 국방연동관리시스템(DIMS)의 원활한 유지보수 수행 및 시스템 효율성/신뢰성 보장을 위한 유지보수 사업

2. 사업예산 : 7.04억원(부가세 포함) * 년간 예산 3.52억원

3. 사업기간 : 2022년 02월 ~ 12월 / 약 11개월

* 선행 유지보수 사업 종료가 2022.1.31(이월) / 예산은 1년치 집행

일 정	주 요 내 용
‘21년 9월	선행 사업(유지보수) 분석 및 사업계획 보고
‘21년 10월	일상감사 및 계약의뢰(조달청)
‘21년 11월~12월	공고 및 제안서평가
‘21년 12월	계약 체결

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 연동의 효율성/신뢰성 확보를 위한 연동 모듈 및 웹체계 관리/개선

◦ 국방정보시스템 신규/변경 연동 구간 구축의 원활한 지원 작업 수행

◦ 장애/오류 분석 및 해결 및 이를 위한 관제 수행

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

’22년 국방자원관리정보체계 통합 유지보수사업

(담당자 : 서기관 정영애, 02)6424-5310)

1. 사업개요

국방전산정보원 소관 전담기관 유지보수 수행 대상체계(9개)에 대한 통합 유지보수 사업

2. 사업예산 : 70억원(부가세 포함)

* 유지보수 범위 조정 및 ’22년 예산 확정에 따라 변경될 수 있음.

3. 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월 / 약 12개월

일 정	주 요 내 용
2021년 9월 ~ 10월	- 사업계획서 작성 및 승인
2021년 11월	- 계약요구사항 협의
2021년 12월	- 계약
2022년 1월 ~ 12월	- 사업 착수 / 실적 보고 및 대금 집행(분기)

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : ’22. 1월 ~ 12월

◦ 사업범위 : 국방자원관리체계(국방통합재정, 동원, 군인연금 등 9개 체계)의 안정적 운영관리를 위한 전담기관(KIDA)을 활용하는 유지보수

5. 계약방법 : 수의계약(국계법 시행령 제26조  제1항 제5호 마목)

‘22년 정보화교육 위탁사업

(담당자 : 주무관 박자인, 02)6424-5131)

1. 사업개요

국방부 및 소속기관, 합동참모본부, 국직부대(기관)의 사무용 SW

활용능력 및 직무수행능력 향상을 위한 정보화교육 위탁운영 사업임.

2. 사업예산 : 1.6억원(부가세 포함)

3. 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월 / 1년

일 정	주 요 내 용
2021년 8월	- 사업계획 수립
2021년 9월 ~ 10월	- 제안요청서 작성 및 공고
2021년 11월	- 기술협상 및 업체계약
2022년 1월 ~ 2022년 12월	- 사업수행

* 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음

4. 사업내용

◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월

◦ 사업범위 : 국방부/소속기관/합동참모본부/국직부대(기관) 소속

공무원 및 군인 대상 교육

5. 계약방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)